Общая информация к заданиям
1.	Ссылка не сервер: https://studyoberemokii.sharepoint.com/sites/study/_api/ProjectData
2.	Логин: pm1@studyoberemokii.onmicrosoft.com
3.	Пароль: Projectm1
Урок 1. Знакомство с MS Power BI
1.	Скачайте и установите MS Power BI https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/desktop/ .
2.	Загрузите MS Power BI и войдите под указанным выше логином и паролем.
3.	Подключитесь к серверу MS Project Online по протоколу OData . 	
4.	Загрузите две таблицы: «Проект», «Задачи»
5.	Оформите отчет: вставьте название отчета, логотип.
6.	Создайте таблицу на основании данных таблицы «Задачи». В таблицу выберите поля согласно таблицы 1.
Таблица 1
№	Название поля	Название столбцов в таблице	
1	НазваниеЗадачи	Название	
2	ДатаНачалаЗадачи	Начало	
3	ДатаОкончанияЗадачи	Окончание	
4	ДлительностьЗадачи	Длительность	
5	ТрудозатратыЗадачи	Трудозатраты	
6	ЗатратыНаЗадачи	Затраты	

Урок 2. Элементы вывода данных в Power BI
1.	Добавьте новую страницу в отчет.
2.	Скопируйте все данные со страницы 1. Измените таблицу на матрицу. В матрице выведите: строки – Название задачи, столбцы – Название проектов, значение – Трудозатраты.
3.	Установите срез по типам проектов. Тип среза установите - раскрывающийся список. 
4.	Установите срез по названию проектов. Тип среза установите – список. Обеспечьте возможность выбирать несколько элементов. 
5.	Добавьте новую страницу в отчет.
6.	Скопируйте все данные со страницы 1. Удалите матрицу.
7.	Установите элемент «Диаграмма дерево» для всех проектов, где распределите все проекты относительно затрат.
8.	Установите элементы «Карточка», на которые выведите: общие затраты проектов, общие трудозатраты проектов.
9.	Установите элемент «Многострочные карточки», куда выведите: название проекта, длительность, затраты, трудозатраты.
10.	Установите элемент «Датчик», на который выведите плановые и фактические значения затрат проектов.

Урок 3. Создание отчета по использованию бюджетов проектов в Power BI
1.	Создайте новый отчет.
2.	Добавьте на лист логотип и название.
3.	Добавьте таблицу: «Проект», «ПовременныйНаборДанныЗадачи».
4.	Добавьте расчетный столбец, через запросы, с расчетом отклонение затрат от бюджетов назначений в проектах.
5.	Установите элемент типы матрицы, где выведите отклонение затрат проектов от бюджетов проектов в разрезе годов и месяцев.
6.	Установите срез по временными периодам.
7.	Установите срез по названию проектов. Тип среза установите – список. Обеспечьте возможность выбирать несколько элементов.
8.	Установите элементы «Карточка», на которые выведите: бюджетные затраты проекта, общие затраты проектов, общие фактические затраты проектов.

Урок 4. Создание отчета по загрузке корпоративных ресурсов в Power BI
1.	Создайте новый отчет.
2.	Добавьте таблицы: «Ресурсы», «ПовременныйНаборДанныНазначения» и «ПовременныйНаборДанныРесурсов».
3.	В таблице «ПовременныйНаборДанныРесурсов» измените данные в столбце «ВремяПоДням» указав там дату начала месяца.
4.	Сгруппируйте в таблице «ПовременныйНаборДанныРесурсов» по полям «ИдентификаторРесурса» и «ВремяПоДням» с суммированием по столбцу «Емкость».
5.	В таблице «ПовременныйНаборДанныНазначения» измените данные в столбце «ВремяПоДням» указав там дату начала месяца.
6.	Сгруппируйте в таблице «ПовременныйНаборДанныНазначения» по полям «ИдентификаторРесурса» и «ВремяПоДням» с суммированием по столбцам «ТрудозатратыНазначения» и «ФактическиеТрудозатратыНазначения».
7.	Свяжите две таблицы «ПовременныйНаборДанныНазначения» и «ПовременныйНаборДанныРесурсов» по полям «ИдентификаторРесурса» и «ВремяПоДням».
8.	Выбирите для отображения два поля «Емкость».
9.	Создайте столбец использование корпоративных ресурсов (разница между столбцами «Емкость» и «ТрудозатратыНазначения»).
10.	Объедините таблицы «ПовременныйНаборДанныНазначения» и «Ресурсы» по полю «ИдентификаторРесурса» и выведите в столбце «НазваниеРесурса».
11.	Установите элемент типы матрицы, где выведите отклонение в использовании ресурсов, годов и месяцев.
12.	Установите срез по названию ресурсов. Тип среза установите – список. Обеспечьте возможность выбирать несколько элементов.
13.	Установите срез по временными периодам.
14.	Установите элементы «Карточка», на которые выведите: общую емкость ресурсов, общие трудозатраты, общие фактические трудозатраты, общие отклонение по трудозатратам.

Урок 6. Настройка графиков использования ресурсов в MS Power BI
1.	Добавьте новый лист к отчету.
2.	Добавьте на лист логотип и название.
3.	Установите срез по названию ресурсов. Тип среза установите – список. Обеспечьте возможность выбирать несколько элементов.
4.	Добавьте график доступности ресурсов.
5.	Добавьте графики, на которые выведите плановые и фактические трудозатраты ресурсов.

Урок 7. Выгрузка данных с MS Project Online в MS Excel в табличном виде
1.	Создайте книгу в MS Excel.
2.	Выгрузите таблицу «Задачи».
3.	Создайте запрос, в котором выгрузите задачи с отклонениями более 3 дней. Перечень полей приведены в таблице 2. 
Таблица 2
№	Название поля	Название столбцов в таблице	
1	ИмяПроекта	Название проекта	
1	НазваниеЗадачи	Название задачи	
2	ДатаНачалаЗадачи	Начало	
3	ДатаОкончанияЗадачи	Окончание	
4	ДлительностьЗадачи	Длительность	
5	ТрудозатратыЗадачи	Трудозатраты	
6	ЗатратыНаЗадачи	Затраты	

4.	Выберите задачи с отклонением по длительности, и задачи, которые лежат на критическом пути.
5.	Выведите таблицу на странице MS Excel. 
6.	Установите срез по названию проектов.

Урок 8. Представление данных с MS Project Online в сводной таблице MS Excel
1.	Создайте книгу в MS Excel. 
2.	Загрузите таблицу «ПовременныйНаборДанныЗадач» и «БазовыйПовременныйНаборДанныЗадач».
3.	Установите фильтр для таблицы «ПовременныйНаборДанныЗадач», по которому скройте суммарные задачи проекта.
4.	Объедините таблицы «ПовременныйНаборДанныЗадач» и «БазовыйПовременныйНаборДанныЗадач» по полям «ИдентификаторЗадачи» и «ВремяПоДням».
5.	Добавьте пользовательские столбцы, в которых рассчитайте отклонение по трудозатратам и отклонение по затратам задач. 
6.	Создайте сводную таблицу, в которой выведете отклонение по трудозатратм и отклонение по затратам в разрезе месяцев и годов.
7.	Установите срезы по времени реализации (ВремяПоДням).
8.	Установите срез по проектам.

Урок 9. Разработка графиков на основании данных с MS Project Online в MS Excel
1.	Создайте новую книгу в книге MS Excel. 
2.	Загрузите таблицы: «БазовыйПовременныйНаборДанныЗадач», «ПовременныйНаборДанныЗадач» и  «Ресурсы».
3.	Установите фильтр в таблице «БазовыйПовременныйНаборДанныЗадач» и выберите основной базовый план.
4.	Свяжите таблицы «БазовыйПовременныйНаборДанныЗадач» и «ПовременныйНаборДанныЗадач» по полям «ИдентификаторНазначения» и «ВремяПоДням».
5.	Свяжите таблицы «ПовременныйНаборДанныЗадач», «Ресурсы» по полям «ИдентификаторРесурса».
6.	Добавьте пользовательские столбцы, в которых рассчитайте отклонение по трудозатратам.
7.	Добавьте график отображения трудозатрат проектов и отклонения по трудозатратам.
8.	Установите срезы по времени (ВремяПоДням).
9.	Установите срез по ресурсам.