Урок 1. Знакомство с MS Project Pro. Описание проекта. Описание задач проекта. Описание длительности
Часть 1. Знакомство с MS Project Pro. Описание проекта
1.	Установите MS Project Pro (если у Вас его еще нет). Ссылка на архив MS Project Pro.
2.	Создайте файл проекта.
3.	Установите следующие свойства проекта: Дату старта проекта: 02.01.2018.
4.	Календарь: «Стандартный»; Планирование от даты начала проекта.
5.	Установите приоритет проекта: 10.
6.	Настройте представление диаграмма Ганта: Скройте временную шкалу. Выведите суммарную задачу проекта.
7.	Выведите строку проекта и переименуйте проект.
8.	Сохраните проект на диске.

Часть 2. Описание задач проекта. Описание длительности
1.	Внесите название работ в план-график проекта. 
2.	Определите структуру проекта (сформируйте суммарные задачи проекта). Суммарные задачи выделены полужирным начертанием в таблице 1 "Перечень задач", все задачи под полужирной строкой являются ее подзадачами.
3.	Установите длительность задач проекта. 

Таблица 1. Перечень задач (полужирным выделены суммарные задачи проекта)
Название задачи	Длительность	
Начало	0 дней	
Разработка и утверждение КП и подписание договора на постройку коттеджа 	5 дней	
Фундамент		
Погружение свай 	1 день	
Срубка свай 	5 дней	
Армирование ростверка 	4 дней	
Бетонирование ростверка 	5 дней	
Набор прочности	3 дней	
Фундамент завершён	0 дней	
Каркас		
Согласование высоты потолка и дополнительных опций 	4 дней	
Кладка из кирпича под плиту перекрытия 	4 дней	
Монтаж плит перекрытия 1 этаж 	1 день	
Кладка 1-го этажа 	9 дней	
Монтаж плит перекрытия 2 этаж 	1 день	
Кладка 2-го этажа 	9 дней	
Монтаж плит прикрытия между вторым этажам и чердаком 	1 день	
Кладка парапета и вентиляционных шахт 	4 дней	
Заполнение оконных проёмов 	3 дней	
Кладка завершена	0 дней	
Кровля		
Разработка и утверждение коммерческого предложения (Кровля) 	5 дней	
Каркас основной кровли 	25 дней	
Утепление кровли со стяжкой 	10 дней	
Металлочерепица основной кровли 	5 дней	
Обшивка вентиляционных шахт и установка козырька 	8 дней	
Кровля завершена	0 дней	
Фасад		
Утепление фасада и грунтовка 	14 дней	
Декоративная штукатурка фасада 	7 дней	
Установка молдинга 	15 дней	
Покраска фасада, грунтовка, установка отмостка 	7 дней	
Облицовка рванным камнем 	3 дней	
Фасад Завершён	0 дней	
Благоустройство		
Разработка и утверждение КП и подписание договора (Благоустройство территории участка) 	5 дней	
Планировка территории 	4 дней	
Устройство тротуаров, подъездных путей к гаражу 	10 дней	
Озеленение участка 	20 дней	
Ограждение участка 	5 дней	
Благоустройство завершено	0 дней	
Завершен	0 дней	

Урок 2. Определение логических взаимосвязей работ. Анализ критического пути. Крайний срок. Сохранение базового плана проекта
Часть 1. Определение логических взаимосвязей работ
1.	Установите связи между задачами проекта, согласно таблицы 2.
2.	Тип связей окончание-начало.
3.	Установите запаздывание на 7 дней для вехи "Фундамент завершён".
4.	Установите опережение на 5 дней для задачи "Устройство тротуаров, подъездных путей к гаражу".
5.	Установите ограничение "Начало не ранее" 01.04.2018 для задачи "Утепление фасада и грунтовка".

Таблица 2. Перечень задач
Название задачи	Предшественники	Последователи	
Начало		2	
Разработка и утверждение КП и подписание договора на постройку коттеджа 	1	4;36;22;11	
Фундамент			
Погружение свай 	2	5;6	
Срубка свай 	4	7	
Армирование ростверка 	4	7	
Бетонирование ростверка 	5;6	8	
Набор прочности	7	9	
Фундамент завершён	8	12	
Каркас			
Согласование высоты потолка и дополнительных опций 	2	12	
Кладка из кирпича под плиту перекрытия 	9;11	13	
Монтаж плит перекрытия 1 этаж 	12	14	
Кладка 1-го этажа 	13	15	
Монтаж плит перекрытия 2 этаж 	14	16	
Кладка 2-го этажа 	15	17	
Монтаж плит прикрытия между вторым этажам и чердаком 	16	18	
Кладка парапета и вентиляционных шахт 	17	19	
Заполнение оконных проёмов 	18	20	
Кладка завершена	19	23;29;37	
Кровля			
Разработка и утверждение коммерческого предложения (Кровля) 	2	23	
Каркас основной кровли 	20;22	24	
Утепление кровли со стяжкой 	23	25	
Металлочерепица основной кровли 	24	26	
Обшивка вентиляционных шахт и установка козырька 	25	27	
Кровля завершена	26	42	
Фасад			
Утепление фасада и грунтовка 	20	30	
Декоративная штукатурка фасада 	29	31	
Установка молдинга 	30	32	
Покраска фасада, грунтовка, установка отмостка 	31	33	
Облицовка рванным камнем 	32	34	
Фасад Завершён	33	42	
Благоустройство			
Разработка и утверждение КП и подписание договора (Благоустройство территории участка) 	2	37	
Планировка территории 	36;20	38	
Устройство тротуаров, подъездных путей к гаражу 	37	39	
Озеленение участка 	38	40	
Ограждение участка 	39	41	
Благоустройство завершено	40	42	
Завершен	34;41;27		

Часть 2. Анализ критического пути. Крайний срок. Сохранение базового плана проекта
1.	Выведите критический путь в плане-графике проекта. Определите, какие задачи больше влияют на сроки реализации проекта. Подумайте над путями сокращения сроков проекта.
2.	Установите крайний срок на веху "Завершен" – 15.07.2018 и на суммарную задачу "Каркас" – 30.03.2018.
3.	Сохраните базовый план проекта. Задачи верхнего уровня в "Базовый план" и все задачи в "Базовый план 1".

Урок 3. Планирование затрат проекта. Описание и назначение трудовых и материальных ресурсов проекта
Часть 1. Планирование затрат проекта
1.	Установите валюту проекта доллары США. Затраты выводить без центов.
2.	Установите фиксированные затраты задач проекта, согласно таблицы 3.
Таблица 3. Перечень фиксированных затрат проекта
Название задачи	Фиксированные затраты	
Фундамент	$0	
Погружение свай 	$17 600	
Срубка свай 	$700	
Армирование ростверка 	$600	
Бетонирование ростверка 	$7 500	
Каркас	$0	
Кладка из кирпича под плиту перекрытия 	$4 400	
Монтаж плит перекрытия 1 этаж 	$12 800	
Кладка 1-го этажа 	$27 000	
Монтаж плит перекрытия 2 этаж 	$12 800	
Кладка 2-го этажа 	$21 400	
Монтаж плит прикрытия между вторым этажам и чердаком 	$12 800	
Кладка парапета и вентиляционных шахт 	$2 900	
Заполнение оконных проёмов	$5 000	
Кровля	$0	
Каркас основной кровли 	$9 000	
Утепление кровли со стяжкой 	$9 000	
Металлочерепица основной кровли 	$9 000	
Обшивка вентиляционных шахт и установка козырька 	$7 000	
Фасад	$0	
Утепление фасада и грунтовка 	$9 000	
Декоративная штукатурка фасада 	$6 300	
Установка молдинга 	$12 000	
Покраска фасада, грунтовка, установка отмостка 	$12 000	
Облицовка рванным камнем 	$7 000	
Благоустройство	$0	
Планировка территории 	$2 800	
Устройство тротуаров, подъездных путей к гаражу 	$1 700	
Озеленение участка 	$3 400	
Ограждение участка 	$1 700	

3.	Описание и назначение подрядчиков проекта, согласно перечня затрат таблицы 4.
Таблица 4. Перечень затрат проекта
Название ресурса	Затраты	
Подрядчик по кровле	$34 000	
Каркас основной кровли 	$9 000	
Утепление кровли со стяжкой 	$9 000	
Металлочерепица основной кровли 	$9 000	
Обшивка вентиляционных шахт и установка козырька 	$7 000	
Подрядчик по благоустройству	$9 600	
Планировка территории 	$2 800	
Устройство тротуаров, подъездных путей к гаражу 	$1 700	
Озеленение участка 	$3 400	
Ограждение участка 	$1 700	

Часть 2. Описание и назначение трудовых и материальных ресурсов проекта
1.	Заполните трудовые и материальные ресурсы в план-график, согласно перечня ресурсов в таблице 5.
Таблица 5. Перечень ресурсов проекта
Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Стандартная ставка	
Менеджер проекта	Трудовой		$25/ч	
Монолитчики	Трудовой		$20/ч	
Каменщики	Трудовой		$25/ч	
Фасадчики	Трудовой		$30/ч	
Разнорабочие	Трудовой		$10/ч	
Сваи	Материальный	шт.	$250	
Бетон	Материальный	куб.	$65	
Кирпич	Материальный	пачка	$170	
ЖБИ	Материальный	шт.	$1 200	
Окна	Материальный	шт.	$800	
Стройматериалы	Затраты			
Сваебойка	Трудовой		$20/ч	
Автокран	Трудовой		$50/ч	
Компрессор	Трудовой		$1 730/мес	

2.	Назначьте трудовые и материальные ресурсы на задачи проекта, согласно объемов назначений ресурсов приведённых в таблице 6.
Таблица 6. Перечень объемов ресурсов проекта
Название задачи	Объем/Затраты	Название ресурса	
Разработка и утверждение КП и подписание договора на постройку коттеджа 	8 ч	Менеджер проекта	
Фундамент			
Погружение свай	40 ч	Монолитчики	
	66 шт.	Сваи	
	$1500	Стройматериалы	
	8 ч	Сваебойка	
	8 ч	Автокран	
Срубка свай	120 ч	Монолитчики	
	$1200	Стройматериалы	
	40 ч	Компрессор	
Армирование ростверка	64 ч	Монолитчики	
	$1000	Стройматериалы	
Бетонирование ростверка	200 ч	Монолитчики	
	32 куб.	Бетон	
	$600	Стройматериалы	
	40 ч	Автокран	
Каркас			
Согласование высоты потолка и дополнительных опций 	8 ч	Менеджер проекта	
Кладка из кирпича под плиту перекрытия	192 ч	Каменщики	
	6 пачка	Кирпич	
	$1000	Стройматериалы	
	32 ч	Автокран	
Монтаж плит перекрытия 1 этаж	10 шт.	 ЖБИ	
	$1000	Стройматериалы	
	8 ч	Автокран	
Кладка 1-го этажа	432 ч	Каменщики	
	52 пачка	Кирпич	
	$1200	Стройматериалы	
	72 ч	Автокран	
Монтаж плит перекрытия 2 этаж	10 шт.	ЖБИ	
	$1000	Стройматериалы	
	8 ч	Автокран	
Кладка 2-го этажа	432 ч	Каменщики	
	50 пачка	Кирпич	
	$1200	Стройматериалы	
	72 ч	Автокран	
Монтаж плит прикрытия между вторым этажам и чердаком	10 шт.	ЖБИ	
	$1000	Стройматериалы	
	8 ч	Автокран	
Кладка парапета и вентиляционных шахт	192 ч	Каменщики	
	4 пачка	Кирпич	
	$700	Стройматериалы	
	32 ч	Автокран	
Заполнение оконных проёмов	120 ч	Разнорабочие	
	10 шт.	Окна	
	$1000	Стройматериалы	
Кровля			
Разработка и утверждение коммерческого предложения (Кровля) 	8 ч	Менеджер проекта	
Фасад			
Утепление фасада и грунтовка	560 ч	Разнорабочие	
	$2500	Стройматериалы	
Декоративная штукатурка фасада	336 ч	Фасадчики	
	$3000	Стройматериалы	
Установка молдинга	720 ч	Фасадчики	
	$5000	Стройматериалы	
Покраска фасада, грунтовка, установка отмостка	336 ч	Фасадчики	
	$2500	Стройматериалы	
Облицовка рванным камнем	144 ч	Фасадчики	
	$2000	Стройматериалы	
Благоустройство			
Разработка и утверждение КП и подписание договора (Благоустройство территории участка) 	8 ч	Менеджер проекта	

Урок 4. Ввод фактических данных о ходе выполнения проектных работ. Печать плана-графика проекта
Часть 1. Ввод фактических данных о ходе выполнения проектных работ
1.	Установите процент выполнения задач проекта, согласно данных таблицы 7.
2.	Установите фактические объемы трудовых и материальных ресурсов и фактические затраты затратных ресурсов.
3.	Установите "Дату отчета о состоянии" на конец января.
4.	Обновите план-график проекта на дату отчета о состоянии на "со сдвигом"
Таблица 7. Выполнение задач проекта
% завершения	Название задачи	Фактические объемы и затраты	Название ресурсов	
100%	Начало	0 ч		
100%	Разработка и утверждение КП и подписание договора на постройку коттеджа 	10 ч	Менеджер проекта	
	Фундамент			
100%	Погружение свай	40 ч	Монолитчики	
		70 шт.	Сваи	
		$1600	Стройматериалы	
		8 ч	Сваебойка	
		8 ч	Автокран	
100%	Срубка свай	100 ч	Монолитчики	
		$1400	Стройматериалы	
		30 ч	Компрессор	
		64 ч		
100%	Армирование ростверка	64 ч	Монолитчики	
		$500	Стройматериалы	
50%	Бетонирование ростверка	100 ч	Монолитчики	
		16 куб.	Бетон	
		$300	Стройматериалы	
		20 ч	Автокран	
	Каркас	8 ч		
100%	Согласование высоты потолка и дополнительных опций 	8 ч	Менеджер проекта	
	Кровля	6 ч		
100%	Разработка и утверждение коммерческого предложения (Кровля) 	6 ч	Менеджер проекта	

Часть 2. Печать плана-графика проекта
1.	Скройте легенду плана-графика.
2.	Добавьте место для подписи руководителя компании.
3.	Выведите на печать только столбцы "Название задачи", "Длительность", "Затраты".
4.	Подготовьте для печати на одном листе.
5.	Отредактируйте отчет по критическим задачам.
6.	Экспортируйте проект в формат pdf.