Урок 1. Создание проектов в MS Project Online
1.	Создайте новый запрос на проект в реестре запросов на проект. Параметры проекта должны быть указаны как в таблице 1.
Таблица 1
№	Название полей	Значения	
1.	Название проекта	Любое, с указанием Вашей фамилии	
2.	Менеджер проекта	По умолчанию	
3.	Дата старта проекта	Дата начала тренинга	
5.	Крайний срок проекта	Через шесть месяцев после старта проекта	
6.	Город	Ваш город	
7.	Портфель проектов	Строительные проекты	

2.	Выберите один из запросов на проект, где еще не назначен менеджер проекта. 
3.	Укажите в качестве менеджера проекта свою фамилию.
4.	Создайте строительный проект на основании информации с запроса на проект. Далее будем называть его: «Проект 1».
5.	Установите крайний срок проекта.

Урок 2. Описание перечня задач проекта в MS Project Online
1.	Создайте корпоративный проект по Вашему запросу на проект. Далее будем называть его: «Проект 2».
2.	Установите суммарную задачу проекта.
3.	Укажите в Вашем проекте, приведенные в таблице 2 задачи. Установите связи и затраты этих задач согласно таблицы 2.
Таблица 2
№	Название задачи	Длительность	Предшественники 	Затраты	
1	Фундамент	20 дней		35 000 $	
2	Каркас	40 дней	1	90 000 $	
3	Кровля	30 дней	2	15 000 $	
4	Фасад	40 дней	3	60 000$	
5	Благоустройство	20 дней	3	18 000 $	
6	Проект завершен	0 дней	4, 5	0 $	
4.	Перенесите на временную шкалу задачи «Каркас» и «Кровля», а также веху «Проект завершен».
5.	Сохраните базовый план проекта.
6.	Опубликуйте и выйдите с проекта.
7.	Откройте «Проект 1».
8.	Сократите срок реализации проекта, сократив длительность задачи «Каркас основной кровли» на пять дней.
9.	Сохраните базовый план проекта.
10.	Опубликуйте и закройте проект.

Урок 3. Создание и назначение затратных и трудовых ресурсов в MS Project Online
1.	Создайте корпоративный затратный ресурс. Опишите компанию подрядчика либо по благоустройству или по устройству кровли.
2.	Для ресурса укажите параметры с таблицы 3.
Таблица 3
№	Название параметра	Значение	
1.	Отображаемое имя	Любое название компании	
2.	СДРес	Подрядчики	

3.	Создайте корпоративный материальный ресурс. Опишите материальный ресурс (бетон, ЖБИ, кирпич) конкретной марки.
4.	Для ресурса укажите параметры с таблицы 4.
Таблица 4
№	Название параметра	Значение	
1.	Отображаемое имя	Любое название материального ресурса	
	Единица измерения материалов	Установите единицу измерения	
2.	СДРес	Материалы	
3.	Владелец назначения по умолчанию	Менеджер проекта	
4. 	Стандартная ставка	Укажите стандартную ставку за единицу материала	
5.	Замените подрядчиков и материальные ресурсы в «Проект 1». Один из подрядчиков и материальных ресурсов должны быть созданные Вами.
6.	Увеличьте количество назначенного материального ресурса на несколько единиц в проекте «Проект 1».
7.	Назначьте созданную Вами компанию подрядчика в «Проект 2» на задачу «Фундамент».
8.	Назначьте созданный Вами материальный ресурс в «Проект 2» на задачу «Каркас».
9.	Установите количество назначенного материального ресурса в проекте «Проект 2».

Урок 4. Создание и назначение трудовых ресурсов в MS Project Online
1.	Создайте корпоративный трудовой ресурс. Опишите бригаду специалистов из типов: каменщики, фасадчики, разнорабочие.
2.	Для ресурса укажите параметры с таблицы 5.
Таблица 5
№	Название параметра	Значение	
1.	Отображаемое имя	Любое название компании	
2.	СДРес	Бригады	
3.	Владелец назначения по умолчанию:	Менеджер проекта	
4.	Стандартная ставка:	Любое число от 0 до 50 $/ч	
5.	Текущие макс. единицы (%):	от 400% до 700%	
3.	Замените трудовые ресурсы в «Проект 1». Одним из ресурсов должен быть созданный Вами ресурс.
4.	Изменить количество трудозатрат назначенных Вами ресурсов.
5.	Добавьте трудовой ресурс созданный вами в «Проект 2». Трудовой ресурс назначьте на задачу «Каркас».
6.	Установите количество трудозатрат назначенного трудового ресурса.

Урок 6. Установка факта выполнения в MS Project Online
1.	Установите факт выполнения вехи «Начало проекта» в «Проект 1», согласно данных таблицы 6.
Таблица 6
Имя задачи	% завершения	Длительность	Фактическая дата начало	
Начало проекта	100%			
Разработка и утверждение КП и подписание договора на строительство коттеджа	100%	Не изменилась	Плановое начало	
Погружение свай	100%	Увеличилась на 2 дня	Плановое начало	
Срубка свай	100%	Увеличилась на 3 дня	+2 два рабочих дня от планового начала 	
Армирование ростверка	100%	Уменьшилась на 1 день	+4 два рабочих дня от планового начала	
Бетонирование ростверка	100%	Увеличилась на 2 дня	+3 два рабочих дня от планового начала	
Набор прочности	40%			

2.	Установите факт использования материальных ресурсов созданных Вами за текущий месяц во всех проектах. Значения должны отличатся от плановых.
3.	Установите факт работы бригады созданной Вами за текущий месяц. Значения должны отличатся от плановых.
4.	Утвердите факт выполнения работ бригадами, созданными Вами в «Проект 2».

Урок 7. Настройка столбцов и представления в MS Project Online
1.	Создайте таблицу подстановки портфеля проектов с Вашей фамилией в названии. 
2.	Перечень данных таблицы подстановки приведена в таблице 7.
Таблица 7
Уровень	Значения	
1.	Основные проекты	
2.	Строительные проекты	
2.	Архитектурные проекты	
1.	Проекты развития	
2.	Проекты развития процессов компании	
2.	Проекты внедрения новых ИТ систем	

3.	Создайте пользовательское поле с параметрами указанными в таблице 8.
Таблица 8
№	Название параметра	Значение	
1.	Имя	Любое, но с Вашей фамилией	
2.	Объект	Проект	
3.	Тип	Текст	
4.	Таблица подстановки 	Ваша таблица подстановки	

4.	Создайте пользовательское поле с параметрами указанными в таблице 9
Таблица 9
№	Название параметра	Значение	
1.	Имя	Любое, но с Вашей фамилией	
2.	Объект	Проект	
3.	Тип	Затраты	
4.	Формула	Посчитайте отклонение по стоимости в национальной валюте вашей страны	
5.	Графические индикаторы	1.	Меньше или равно 1000 хорошо
2.	Больше 1000 плохо	

5.	Создайте новое представление для центра проектов. В названии представлений укажите свою фамилию.
6.	Параметры представления приведены в таблице 10
Таблица 10
№	Название параметра	Значение	
1.	Имя	Любое, но с Вашей фамилией	
2.	Поля	1.	Имя проекта
2.	% завершення
3.	Начало 
4.	Окончание
5.	Ваше текстовое поле 
6.	Ваше затратное поле	
3.	Формат диаграммы Ганта:	Отслеживание (центр проектов)	
4.	Группировка	По вашему текстовому полю	
5.	Фильтр	Выберите только Ваши проекты	
6.	Категория безопасности	1.	Моя организация
2.	Мои проекты	

Урок 8. Работа с сайтом проекта в MS Project Online
1.	Перейдите на домашнюю страницу проекта. 
2.	Создайте запись в записной книжке. Переименуйте раздел. Добавьте новую информацию на страницу раздела. Создайте новую станицу в разделе.
3.	Создайте событие в календаре с параметрами указанными в таблице 11.
Таблица 11
№	Название параметра	Значение	
1.	Название 	Совещание проектной команды	
2.	Время начала	Завтра в 10.00	
3.	Время окончания	Завтра в 12.00	
4.	Категория	Собрание	

4.	Создайте вопрос в приложении «Вопрос». Параметры вопроса в таблице 12.
Таблица 12
№	Название параметра	Значение	
1.	Название 	Клиент изменил требования	
2.	Владелец	Менеджер проекта	
3.	Кому назначено	Менеджер проекта	
4.	Состояние	Активен	
5.	Категория	Категория 2	
6.	Приоритет 	Высокий	
7.	Срок	До следующего понедельника	
8.	Обсуждение	Заказчик молодец	
9.	Решение	Внести срочно изменения в проект	

5.	Задайте вопрос в обсуждении. Любой вопрос на Ваш выбор.

Урок 9. Работам с приложениями MS SharePoint в MS Project Online
1.	Перейдите на сайт проекта «Проект 1».
2.	Создайте папку документов. В папке создайте документ типа Word. 
3.	Создайте в приложении документов новый столбец с названием «Ответственный» с выбором значений из перечня: Иванов, Петров, Сидоров.
4.	Создайте в приложении документов новое стандартное представление с параметрами из таблицы 13.
Таблица 13
№	Название параметра	Значение	
1.	Имя представления: 	Любое, но с Вашей фамилией	
2.	Аудитория представления:	Создание общего представления	
3.	Столбцы:	1.	Тип (значок связи с документом)
2.	Имя (ссылка на документ с меню правки)
3.	Изменено
4.	Кем изменено
5.	Столбец пользователя	
4.	Сортировка	Имя (ссылка на документ с меню правки)	
5.	Группировка	Столбец пользователя	
6.	Итоги	Имя, количество значений	
5.	Создайте приложение «Контакты» и назовите его «Заинтересованные стороны».
6.	Разместите ссылку на приложение «Заинтересованные стороны» под пунктом «Документы».
7.	Добавьте поле в приложение «Заинтересованные стороны» для хранения краткого текста с названием «Тип компании». Добавьте перечень значений на выбор: Строительная компания, Архитектурная компания, ИТ компания.
8.	Измените представление по умолчанию в приложении «Заинтересованные стороны». Добавьте Ваше созданное поле.
9.	Добавьте приложение «Обсуждения» на центральную страницу сайта проекта «Проект 1».