Author: Антон Колий
Last saved by: Иван Оберемок

Урок 1. Знакомство с MS Project Pro. Описание проекта
1.	Установите MS Project Pro (если у Вас его еще нет). Ссылка на архив MS Project Pro.
2.	Создайте файл проекта.
3.	Установить дату старта проекта: 01.01.2018.
4.	Календарь: «Стандартный», Планирование от даты начала проекта.
5.	Установите приоритет проекта: 10.
6.	Настройте представление диаграмма Ганта: Скройте временную шкалу. Выведите суммарную задачу проекта.
7.	Выведите строку проекта и переименуйте проект.
8.	Сохраните проект на диске.

Урок 2. Календари проекта
1.	Установите режим работы компании с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 с обедом с 13:00 до 14:00, по пятницам с 9:00 до 15:00 без обеда.
2.	Установите праздничный день 8 марта, как выходной в течении 4 лет.
3.	Установите предпраздничные дни 7 марта в течении 4 лет с режимом работы с 9:00 по 13:00.

Урок 3. Описание стратегических задач проекта. Определение кода СДР
1.	Определите код СДР установив первый уровень типа «Знаки».
2.	Добавьте стратегические задачи проекта согласно данных таблицы 1.
3.	Установите код СДР для задач согласно данных таблицы 1.
4.	Установите длительность стратегических задач согласно данных таблицы 1.
5.	Уточните когда можете закончить проект при последовательной реализации стратегических задач.
Таблица 1
СДР | Название задачи | Длительность
ФД | Фундамент | 10 дней
КС | Каркас | 40 дней
КР | Кровля | 50 дней
ФС | Фасад | 80 дней
БЛ | Благоустройство | 30 дней
6.	Создайте столбец «Стратегические задачи» типа «Флаг» и установите значение флага согласно таблицы.
7.	Перенесите на временную шкалу все стратегические задачи. Перечень стратегических задач в таблице 2. Установите задачи так что бы они не перекрывали друг друга. 
Таблица 2
Название задачи
Фундамент
Каркас
Кровля
Фасад
Благоустройство

Урок 4. Декомпозиция задач проекта. Установка длительности
1.	Декомпозируйте задачи проекта согласно данным таблицы 3.
2.	Установите длительность согласно данных таблицы 3.
Таблица 3
Название задачи | Длительность
Начало | 0 дней
Разработка и утверждение КП и подписание договора на строительство коттеджа | 5 дней
Фундамент |
Погружение свай | 1 день
Срубка свай | 5 дней
Армирование ростверка | 4 дней
Бетонирование ростверка | 5 дней
Набор прочности | 3 дней
Фундамент завершён | 0 дней
Каркас |
Согласование высоты потолка и дополнительных опций | 4 дней
Кладка из кирпича под плиту перекрытия | 4 дней
Монтаж плит перекрытия 1 этаж | 1 день
Кладка 1-го этажа | 9 дней
Монтаж плит перекрытия 2 этаж | 1 день
Кладка 2-го этажа | 9 дней
Монтаж плит прикрытия между вторым этажам и чердаком | 1 день
Кладка парапета и вентиляционных шахт | 4 дней
Заполнение оконных проёмов | 3 дней
Кладка завершена | 0 дней
Кровля |
Разработка и утверждение коммерческого предложения (Кровля) | 5 дней
Каркас основной кровли | 25 дней
Утепление кровли со стяжкой | 10 дней
Металлочерепица основной кровли | 5 дней
Обшивка вентиляционных шахт и установка козырька | 8 дней
Кровля завершена | 0 дней
Фасад |
Утепление фасада и грунтовка | 14 дней
Декоративная штукатурка фасада | 7 дней
Установка молдинга | 15 дней
Покраска фасада, грунтовка, установка отмостка | 7 дней
Облицовка рванным камнем | 3 дней
Фасад Завершён | 0 дней
Благоустройство |
Разработка и утверждение КП и подписание договора (Благоустройство территории участка) | 5 дней
Планировка территории | 4 дней
Устройство тротуаров, подъездных путей к гаражу | 10 дней
Озеленение участка | 20 дней
Ограждение участка | 5 дней
Благоустройство завершено | 0 дней
Завершен | 0 дней
3. Обозначьте вехи как стратегические задачи проекта.
4. Установите вехи на временной шкале проекта.

Урок 6. Определение логических взаимосвязей работ
1.	Установите связи между задачами проекта согласно данных в таблице 4.
2.	Тип связей окончание-начало.
3.	Установите запаздывание на 7 дней для вехи "Фундамент завершён".
4.	Установите опережение на 5 дней для задачи "Устройство тротуаров, подъездных путей к гаражу".
5.	Установите ограничение "Начало не ранее" 01.04.2018 для задачи "Утепление фасада и грунтовка".

Таблица 4.
№ | Название задачи | Предшественники | Последователи
1 | Начало | | 2
2 | Разработка и утверждение КП и подписание договора на постройку коттеджа | 1 | 4;36;22;11
3 | Фундамент | |
4 | Погружение свай | 2 | 5;6
5 | Срубка свай | 4 | 7
6 | Армирование ростверка | 4 | 7
7 | Бетонирование ростверка | 5;6 | 8
8 | Набор прочности | 7 | 9
9 | Фундамент завершён | 8 | 12
10 | Каркас | |
11 | Согласование высоты потолка и дополнительных опций | 2 | 12
12 | Кладка из кирпича под плиту перекрытия | 9;11 | 13
13 | Монтаж плит перекрытия 1 этаж | 12 | 14
14 | Кладка 1-го этажа | 13 | 15
15 | Монтаж плит перекрытия 2 этаж | 14 | 16
16 | Кладка 2-го этажа | 15 | 17
17 | Монтаж плит прикрытия между вторым этажам и чердаком | 16 | 18
18 | Кладка парапета и вентиляционных шахт | 17 | 19
19 | Заполнение оконных проёмов | 18 | 20
20 | Кладка завершена | 19 | 23;29;37
21 | Кровля | |
22 | Разработка и утверждение коммерческого предложения (Кровля) | 2 | 23
23 | Каркас основной кровли | 20;22 | 24
24 | Утепление кровли со стяжкой | 23 | 25
25 | Металлочерепица основной кровли | 24 | 26
26 | Обшивка вентиляционных шахт и установка козырька | 25 | 27
27 | Кровля завершена | 26 | 42
28 | Фасад | |
29 | Утепление фасада и грунтовка | 20 | 30
30 | Декоративная штукатурка фасада | 29 | 31
31 | Установка молдинга | 30 | 32
32 | Покраска фасада, грунтовка, установка отмостка | 31 | 33
33 | Облицовка рванным камнем | 32 | 34
34 | Фасад Завершён | 33 | 42
35 | Благоустройство | |
36 | Разработка и утверждение КП и подписание договора (Благоустройство территории участка) | 2 | 37
37 | Планировка территории | 36;20 | 38
38 | Устройство тротуаров, подъездных путей к гаражу | 37 | 39
39 | Озеленение участка | 38 | 40
40 | Ограждение участка | 39 | 41
41 | Благоустройство завершено | 40 | 42
42 | Завершен | 34;41;27 |

Урок 7. Анализ критического пути. Крайний срок. Базовый план проекта
1.	Скорректируйте связи в проекте. Уберите опережение для задачи «Устройство тротуаров, подъездных путей к гаражу» и запланируйте ее реализацию параллельно с задачей «Планировка территории». 
2.	Выведите критический путь в план-график проекта. Определите какие задачи больше влияют на сроки реализации проекта. Подумайте над путями сокращения сроков проекта.
3.	Установите критическими задачи, которые имеют резерв меньше 3 дней.
4.	Установите крайний срок на веху "Завершен" 15.07.2018 и на суммарную задачу "Каркас" 30.03.2018.
5.	Сохраните базовый план всего проекта.
6.	Пересохраните базовый план в «Базовый план 1».
7.	Сохраните базовый план для стратегического плана проекта. 

Урок 8. Бюджетное планирование проекта
1.	Установите валюту проекта доллары США. Затраты выводить без центов.
2.	Создайте два бюджета: Бюджет компании, Бюджет клиентов.
3.	Бюджетное ограничение всего проекта $250 000.
4.	Установите бюджетные ограничения по месяцам согласно данных таблицы 5.
Таблица 5
Месяц | Бюджет компании | Бюджет клиентов
Январь | $ 30 000 | $ 30 000
Февраль | $ 40 000 | $ 30 000
Март | $ 20 000 | $ 20 000
Апрель | $ 20 000 | $ 10 000
Май | $ 15 000 | $ 15 000
Июнь | $ 0 | $ 20 000
5.	Сохраните базовый план стратегических задач проекта.
6.	Установите столбец, который будет выводить разницу между плановыми затратами и бюджетом проекта.

Урок 9. Планирование затрат проекта
1.	Установите фиксированные затраты на стратегические задачи согласно данных таблицы 6.
Таблица 6
Название задачи | Фиксированные затраты
Фундамент | $35 000
Каркас | $100 000
Кровля | $35 000
Фасад | $50 000
Благоустройство | $30 000

2.	Сохраните базовый план для стратегических задач проекта.
3.	Детализируйте фиксированные затраты задач проекта согласно данных таблицы 7.
Таблица 7
Название задачи | Фиксированные затраты
Фундамент | $0
Погружение свай | $17 600
Срубка свай | $2 700
Армирование ростверка | $3 600
Бетонирование ростверка | $7 500
Каркас | $0
Кладка из кирпича под плиту перекрытия | $4 400
Монтаж плит перекрытия 1 этаж | $12 800
Кладка 1-го этажа | $27 000
Монтаж плит перекрытия 2 этаж | $12 800
Кладка 2-го этажа | $21 400
Монтаж плит прикрытия между вторым этажам и чердаком | $12 800
Кладка парапета и вентиляционных шахт | $2 900
Заполнение оконных проёмов | $5 000
Кровля | $0
Каркас основной кровли | $9 000
Утепление кровли со стяжкой | $9 000
Металлочерепица основной кровли | $9 000
Обшивка вентиляционных шахт и установка козырька | $7 000
Фасад | $0
Утепление фасада и грунтовка | $9 000
Декоративная штукатурка фасада | $6 300
Установка молдинга | $12 000
Покраска фасада, грунтовка, установка отмостка | $12 000
Облицовка рванным камнем | $7 000
Благоустройство | $0
Планировка территории | $5 800
Устройство тротуаров, подъездных путей к гаражу | $6 700
Озеленение участка | $7 400
Ограждение участка | $6 700
4.	Добавьте столбец, который будет считать сумму в Вашей национальной валюте по курсу на дату создания.
5.	Оптимизируйте затраты проекта согласно бюджетных ограничений.
6.	Сохраните базовый план проекта

Урок 11. Описание и назначение затратных ресурсов проекта
1.	Добавьте затратные ресурсы: Подрядчики, Сотрудники, Материалы, Механизмы, Бригада.
2.	Назначьте затратные ресурсы на задачи с указанием затрат согласно данных с таблицы 8. 
Таблицы 8
СДР | Название ресурса | Затраты
| Подрядчики |
КР | Кровля | $34 000
БЛ | Благоустройство | $28 000
| Сотрудники |
КП | Разработка и утверждение КП | $200
КС.1 | Согласование высоты потолка и дополнительных опций | $200
КР.1 | Разработка и утверждение коммерческого предложения (Кровля) | $200
БЛ.1 | Разработка и утверждение КП и подписание договора (Благоустройство территории участка) | $200
| Материалы |
ФД.1 | Погружение свай | $18 000
ФД.2 | Срубка свай | $1 200
ФД.3 | Армирование ростверка | $1 000
ФД.4 | Бетонирование ростверка | $2 680
КС.2 | Кладка из кирпича под плиту перекрытия | $2 000
КС.3 | Монтаж плит перекрытия 1 этаж | $8 000
КС.4 | Кладка 1-го этажа | $8 000
КС.5 | Монтаж плит перекрытия 2 этаж | $8 000
КС.6 | Кладка 2-го этажа | $7 300
КС.7 | Монтаж плит прикрытия между вторым этажам и чердаком | $7 600
КС.8 | Кладка парапета и вентиляционных шахт | $1 400
КС.9 | Заполнение оконных проёмов | $9 000
ФС.1 | Утепление фасада и грунтовка | $2 500
ФС.2 | Декоративная штукатурка фасада | $3 000
ФС.3 | Установка молдинга | $5 000
ФС.4 | Покраска фасада, грунтовка, установка отмостка | $2 500
ФС.5 | Облицовка рванным камнем | $2 000
| Механизмы |
ФД.1 | Погружение свай | $560
ФД.2 | Срубка свай | $500
ФД.4 | Бетонирование ростверка | $2 000
КС.2 | Кладка из кирпича под плиту перекрытия | $1 600
КС.3 | Монтаж плит перекрытия 1 этаж | $400
КС.4 | Кладка 1-го этажа | $3 600
КС.5 | Монтаж плит перекрытия 2 этаж | $400
КС.6 | Кладка 2-го этажа | $3 600
КС.7 | Монтаж плит прикрытия между вторым этажам и чердаком | $400
КС.8 | Кладка парапета и вентиляционных шахт | $1 600
| Бригады |
ФД.1 | Погружение свай | $800
ФД.2 | Срубка свай | $2 400
ФД.3 | Армирование ростверка | $1 300
ФД.4 | Бетонирование ростверка | $4 000
КС.2 | Кладка из кирпича под плиту перекрытия | $5 000
КС.4 | Кладка 1-го этажа | $8 000
КС.6 | Кладка 2-го этажа | $7 000
КС.8 | Кладка парапета и вентиляционных шахт | $4 800
КС.9 | Заполнение оконных проёмов | $1 000
ФС.1 | Утепление фасада и грунтовка | $3 000
ФС.2 | Декоративная штукатурка фасада | $8 000
ФС.3 | Установка молдинга | $10 000
ФС.4 | Покраска фасада, грунтовка, установка отмостка | $10 000
ФС.5 | Облицовка рванным камнем | $4 500

Урок 12. Планирование работы подрядчиков
1.	Создайте столбец для выбора лотов проектов – «Лот проекта».
2.	Создайте столбец для фиксирования договоров по проекту – «Договор».
3.	Создайте двух подрядчиков: «Подрядчик по кровле» и «Подрядчик по благоустройству».
4.	Назначте подрядчиков проекта на задачи согласно данных таблицы 9.
5.	Назначте затраты на задачи подрядчиков проекта согласно данных таблицы 9.
Таблица 9
Название ресурса | Затраты
Подрядчик по кровле | $34 000
Каркас основной кровли | $9 000
Утепление кровли со стяжкой | $9 000
Металлочерепица основной кровли | $9 000
Обшивка вентиляционных шахт и установка козырька | $7 000
Подрядчик по благоустройству | $28 600
Планировка территории | $7 800
Устройство тротуаров, подъездных путей к гаражу | $6 700
Озеленение участка | $7 400
Ограждение участка | $6 700

Урок 13. Описание и назначение трудовых ресурсов проекта
1.	Создайте столбец ответственных – столбец типа «Код структуры». Создайте список ответственных: менеджер проекта, главный инженер проекта.
2.	Менеджера проекта укажите ответственным на задачи: Разработка и утверждение КП, Согласование высоты потолка и дополнительных опций, Разработка и утверждение коммерческого предложения (Кровля), Разработка и утверждение КП и подписание договора (Благоустройство территории участка).
3.	На все остальные задачи назначьте ответственным главного инженера.
4.	Заполните трудовые ресурсы в плане-графике. Перечень ресурсов приведен в таблице 10.
Таблица 10.
Название ресурса | Тип | Единицы измерения материалов | Стандартная ставка
Менеджер проекта | Трудовой | | $25/ч
Монолитчики | Трудовой | | $20/ч
Каменщики | Трудовой | | $25/ч
Фасадчики | Трудовой | | $30/ч
Разнорабочие | Трудовой | | $10/ч
Сваебойка | Трудовой | | $20/ч
Автокран | Трудовой | | $50/ч
Компрессор | Трудовой | | $1 730/мес
5.	Замените затратные ресурсы: Сотрудники и Механизмы на трудовые ресурсы на задачах проекта. Объемы назначений ресурсов приведены в таблице 11.
Таблица 11.
Название задачи | Объем/Затраты | Название ресурса
Разработка и утверждение КП | 8 ч | Менеджер проекта
Фундамент | |
Погружение свай | 40 ч | Монолитчики
| 8 ч | Сваебойка
| 8 ч | Автокран
Срубка свай | 120 ч | Монолитчики
| 40 ч | Компрессор
Армирование ростверка | 64 ч | Монолитчики
Бетонирование ростверка | 200 ч | Монолитчики
| 40 ч | Автокран
Каркас | |
Согласование высоты потолка и дополнительных опций | 8 ч | Менеджер проекта
Кладка из кирпича под плиту перекрытия | 192 ч | Каменщики
| 32 ч | Автокран
Монтаж плит перекрытия 1 этаж | 8 ч | Автокран
Кладка 1-го этажа | 432 ч | Каменщики
| 72 ч | Автокран
Монтаж плит перекрытия 2 этаж | 8 ч | Автокран
Кладка 2-го этажа | 432 ч | Каменщики
| 72 ч | Автокран
Монтаж плит прикрытия между вторым этажам и чердаком | 8 ч | Автокран
Кладка парапета и вентиляционных шахт | 192 ч | Каменщики
| 32 ч | Автокран
Заполнение оконных проёмов | 120 ч | Разнорабочие
Кровля | |
Разработка и утверждение коммерческого предложения (Кровля) | 32 ч | Менеджер проекта
Фасад | |
Утепление фасада и грунтовка | 560 ч | Разнорабочие
Декоративная штукатурка фасада | 336 ч | Фасадчики
Установка молдинга | 720 ч | Фасадчики
Покраска фасада, грунтовка, установка отмостка | 336 ч | Фасадчики
Облицовка рванным камнем | 144 ч | Фасадчики
Благоустройство | |
Разработка и утверждение КП и подписание договора (Благоустройство территории участка) | 32 ч | Менеджер проекта

Урок 14. Решение ресурсных конфликтов. Назначение материальных ресурсов проекта
1.	Решите ресурсные конфликты с учетом того что менеджер проектов может быть только один, а специалистов в бригаде может быть необходимое количество. Определите сколько необходимо специалистов в каждой бригаде что бы реализовать проект в рамках установленных ограничений.
2.	Заведите материальные ресурсы в план-график. Перечень материальных ресурсов приведен в таблице 12.
Таблица 12.
Название ресурса | Тип | Единицы измерения материалов | Стандартная ставка
Сваи | Материальный | шт. | $250
Бетон | Материальный | куб. | $65
Кирпич | Материальный | пачка | $170
ЖБИ | Материальный | шт. | $1 200
Окна | Материальный | шт. | $800

3.	Назначьте материальные ресурсы вместо затратного ресурса «Материалы» на задачи проекта. Объемы назначений ресурсов приведены в столбце «Объем/Затраты» в таблице 13.
Таблица 13.
Название задачи | Объем/Затраты | Название ресурса
Фундамент | |
Погружение свай | 66 шт. | Сваи
| $1500 | Материалы
Бетонирование ростверка | 32 куб. | Бетон
| $600 | Материалы
Каркас | |
Кладка из кирпича под плиту перекрытия | 6 пачка | Кирпич
| $1000 | Материалы
Монтаж плит перекрытия 1 этаж | 10 шт. | ЖБИ
| $1000 | Материалы
Кладка 1-го этажа | 52 пачка | Кирпич
| $1200 | Материалы
Монтаж плит перекрытия 2 этаж | 10 шт. | ЖБИ
| $1000 | Материалы
Кладка 2-го этажа | 50 пачка | Кирпич
| $1200 | Материалы
Монтаж плит прикрытия между вторым этажам и чердаком | 10 шт. | ЖБИ
| $1000 | Материалы
Кладка парапета и вентиляционных шахт | 4 пачка | Кирпич
| $700 | Материалы
Заполнение оконных проёмов | 10 шт. | Окна
| $1000 | Материалы
4.	Запланируйте доставку материальных ресурсов в начале реализации задач проекта.

Урок 16. Оптимизация затрат. Процент выполнения задач. Освоенный объем
1.	Оптимизируйте затраты проектов. Предложите варианты сокращения затрат проекта.
2.	Установите дату отчета о состоянии проекта на конец января.
3.	Установите процент выполнения задач проекта как указано в таблице 14.
4.	Установите "Дату отчета о состоянии" на конец января.
Таблица 14.
Физический % завершения | % завершения | Название задачи
100% | 100% | Начало
100% | 100% | Разработка и утверждение КП
100% | 100% | Фундамент
100% | 100% | Погружение свай
100% | 100% | Срубка свай
70% | 80% | Армирование ростверка
60% | 50% | Бетонирование ростверка
5.	Проанализируете освоенный объем проекта.
6.	Добавьте в столбце расчета процента выполнения по затратам «% по затратам» с формулой «IIf([Затраты]=0;0;([Фактические затраты]/[Затраты])*100)».
7.	Проанализируйте выполнение проекта по затратам.
8.	Обновите план-график проекта со сдвигом на дату отчета о состоянии.

Урок 17. Установка фактических затрат и трудозатрат проекта
1.	Уточните выполнение задач проекта за январь месяц. Приведенный в таблице 15 перечень задач был реализован еще в январе.
2.	Установите "Дату отчета о состоянии" на конец февраля.
Таблица 15.
Физический % завершения | % завершения | Название задачи | Фактическая длительность | Фактическое начало
100% | 100% | Армирование ростверка | 8 дней |
100% | 100% | Бетонирование ростверка | 10 дней | 18.01.2018
3.	Удалите запаздывание для задачи «Набор прочности».
4.	Установите фактические объемы трудовых и материальных ресурсов, и фактические затраты затратных ресурсов как указано в таблице 16.
Таблица 16.

Физический
% завершения

Название задачи

Фактические трудозатраты

| Каркас |
100% | Согласование высоты потолка и дополнительных опций |
| Менеджер проекта | 10 ч
100% | Кладка из кирпича под плиту перекрытия |
| Материалы |
| Каменщики | 200 ч
| Автокран | 30 ч
| Кирпич | 10 пачка
100% | Монтаж плит перекрытия 1 этаж |
| Материалы |
| Автокран | 8 ч
| ЖБИ | 10 шт.
60% | Кладка 1-го этажа |
| Материалы |
| Каменщики | 200 ч
| Автокран | 30 ч
| Кирпич | 26 пачка
5.	Обновите план-график проекта со сдвигом на дату отчета о состоянии. 

Урок 18. Отчеты по проекту
1.	Создайте отчет проекта.
2.	В отчете выведите таблицу по задачам проекта: 
•	поля: базовые затраты, бюджетная стоимость, затраты, отклонение по стоимости, фактические затраты, оставшиеся затраты;
•	уровень: сводка по проекту.
3.	Добавьте в отчет график, в котором покажите, как были запланированы базовые затраты, затраты проекта и фактически затраты проекта по неделям. Уровень задач – сводка по проекту.
4.	 В отчете выведите таблицу по ресурсам проекта: 
•	поля: название, базовые трудозатраты, трудозатраты, отклонение по трудозатратам, фактические трудозатраты;
•	группировка по полям: группа;
•	фильтр: тип ресурсов – трудовой и материальный.
5.	Добавьте в отчет круговую диаграмму, в которой выведите какую долю от общих затрат занимает каждая группа ресурсов.

Урок 19. Настройка MS Project Professional “под себя”
1.	Создайте столбец с графическим индикатором, который показывает: 
•	отклонение меньше или равно 7 дней – зеленый цвет;
•	отклонение меньше или равно 14 дней – желтый цвет;
•	отклонение больше 14 дней – красный цвет.
2.	Создайте свой настраиваемый фильтр, в котором выведите перечень нереализованных критических задач, а так же задач с затратами больше 1000 $.
3.	Создайте группировку с условиями: 1 уровень – договора проекта, 2 уровень – СДР структура.
4.	Создайте свою таблицу, в которой выведите: «ИД», «Название задачи», «Длительность», «Затраты», «Отклонение по окончанию», «Отклонение по затратам».
5.	Создайте свое представление с Вашей группировкой, фильтром и таблицей.
6.	Настройте печать Вашего представления:
•	Скройте легенду плана-графика;
•	Добавьте место для подписи руководителя компании;
•	Выведите на печать только столбцы "Название задачи", "Длительность", "Затраты";
•	Подготовьте план-график для печати на одном листе.
7.	Экспортируйте проект в формат pdf.

Описание заданий к Урокам курса “MS Project Professional” 
© Оберемок Иван 2018