Урок 1. Ознайомлення з MS Project Pro. Опис проекту
1.	Створіть файл проекту.
2.	Встановити дату старту проекту: 02.01.2023.
3.	Календар: "Стандартний", Планування від дати початку проекту.
4.	Встановіть пріоритет проекту: 10.
5.	Налаштуйте представлення діаграма Ганта: Скрийте часову шкалу. Виведіть сумарне завдання проекту.
6.	Виведіть рядок проекту та перейменуйте проект.
7.	Збережіть проект на диску.

Урок 2. Календарі проекту
1.	Встановіть режим роботи компанії з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00 з обідом з 14:00 до 15:00 по п'ятницях з 9:00 до 15:00 без обіду.
2.	Встановіть святковий день 8 березня як вихідний протягом 2 років.
3.	Встановіть передсвяткові дні 7 березня на протязі 2 років з режимом роботи з 9:00 до 17:00 без обіду.

Урок 3. Визначення коду WBS. Декомпозиція стратегічних завдань.
1.	Визначте код WBS, встановивши перший рівень типу «Знаки» і другий рівень «Знаки».
2.	Встановіть префікс коду проекту «КТ.»
3.	Додайте завдання першого рівня «Ресурси проекту». Код WBS завдань встановіть «РП».
4.	Додайте стратегічні завдання проекту згідно з даними таблиці 1.
5.	Встановіть код WBS для завдань згідно з даними таблиці 1.
6.	Встановіть тривалість стратегічних завдань згідно з даними таблиці 1.
7.	Уточніть, коли можете закінчити проект при послідовній реалізації стратегічних завдань.
Таблиця 1
WBS	Ім'я завдання	Тривалість	
ПД	Проектні документи	20 днів	
ФД	Фундамент	10 днів	
КС	Каркас	40 днів	
ПК	Покрівля	50 днів	
ФС	Фасад	80 днів	
БЛ	Благоустрій	30 днів	

8.	Встановіть дати старту стратегічних завдань проекту. Перелік завдань візьміть у таблиці 2
Таблиця 2
WBS	Ім'я завдання	Дати старту	
ФД	Фундамент	07.01.23	
КС	Каркас	23.01.23	
ПК	Покрівля	21.03.23	
ФС	Фасад	20.02.23	
БЛ	Благоустрій	22.05.23	
9.	Створіть стовпець «Стратегічні завдання» типу «Позначка» та встановіть прапорець відповідно до таблиці.
10.	Перенесіть на тимчасову шкалу стратегічні завдання. Перелік стратегічних завдань у таблиці 3. Встановіть завдань так що б вони не перекривали одне одного.
Таблиця 3
WBS	Ім'я завдання	
ПД	Проектні документи	
ФД	Фундамент	
КС	Каркас	
ПК	Покрівля	
ФС	Фасад	
БЛ	Благоустрій	
11.	Установіть крайній термін реалізації стратегічних завдань проекту. Перелік крамних термінів наведено в таблиці 4.
Таблиця 4
WBS	Ім'я завдання	Дати обмеження	
КС	Каркас	31.03.23	
ФС	Фасад	30.06.23	
БЛ	Благоустрій	01.07.23	
12.	Установіть базовий план стратегічних завдань проекту.

Урок 4. Опис завдань проекту
1.	Декомпозуйте завдання проекту згідно з даними таблиці 5.
2.	Встановіть тривалість згідно з даними таблиці 5.
Таблиця 5
Ім'я завдання	Тривалість	
Початок	0 днів	
Проектні документи		
Розробка КП та договору на будівництво котеджу	4 днів	
Затвердження КП та підписання договору на будівництво котеджу	3 днів	
Узгодження висоти стелі та додаткових опцій	4 днів	
Розробка та затвердження КП і договору (Покрівля)	5 днів	
Розробка та затвердження КП та договору (Благоустрій території ділянки)	5 днів	
Проектна документація підготовлена	0 днів	
Фундамент		
Занурення паль	1 день	
Зрубка паль	5 днів	
Армування ростверку 	4 днів	
Бетонування ростверку 	5 днів	
Набір міцності	3 днів	
Фундамент завершено	0 днів	
Каркас		
Кладка із цегли під плиту перекриття	4 днів	
Монтаж плит перекриття 1 поверх 	1 день	
Кладка 1-го поверху 	9 днів	
Монтаж плит перекриття 2 поверх	1 день	
Кладка 2-го поверху	9 днів	
Монтаж плит перекриття між другим поверхом та горищем 	1 день	
Кладка парапету та вентиляційних шахт	4 днів	
Заповнення віконних отворів	3 днів	
Кладка завершена	0 днів	
Покрівля		
Каркас основної покрівлі	25 днів	
Утеплення покрівлі зі стяжкою	10 днів	
Металочерепиця основної покрівлі 	5 днів	
Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка 	8 днів	
Покрівля завершена	0 днів	
Фасад		
Утеплення фасаду та ґрунтовка	15 днів	
Декоративна штукатурка фасаду 	7 днів	
Установка молдингу	15 днів	
Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення 	7 днів	
Облицювання рваним каменем	5 днів	
Фасад завершено	0 днів	
Благоустрій		
Планування території 	4 днів	
Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража 	10 днів	
Озеленення ділянки 	20 днів	
Огородження ділянки	5 днів	
Благоустрій завершено	0 днів	
Проект завершено	0 днів	
3. Визначте віхи як стратегічні завдання проекту використовуючи перелік віх в таблиці 6. 
4. Встановіть віхи на часовій шкалі проекту.
5. Встановіть крайній термін для віх. Дати для обмеження візьміть в таблиці 6.
Таблиця 6
Ім'я завдання	Дати обмеження	
Кладка завершена	24.03.23	
Фасад завершено	25.05.23	
Благоустрій завершено	01.07.23	

Урок 5. Визначення логічних взаємозв'язків робіт
1.	Встановіть зв'язки між завданнями проекту згідно з даними у таблиці 7.
2.	Тип зв'язків закінчення-початок.
3.	Встановіть запізнення на 4 днів для завдання "Утеплення фасаду та ґрунтовка" від віхи " Кладка завершена ".
4.	Встановіть випередження на 8 днів для завдання "Озеленення ділянки " від віхи "Покрівля завершена".
5.	Встановіть обмеження на завдання "Планування території  типу "не раніше" до 20.03.2023.
Таблиця 7.
№	Ім'я завдання	Попередники	Наступники	
2	Початок		4	
3	Проектні документи			
4	Розробка КП та договору на будівництво котеджу	2	5	
5	Затвердження КП та підписання договору на будівництво котеджу	4	6;7;8;11	
6	Узгодження висоти стелі та додаткових опцій	5	9;18	
7	Розробка та затвердження КП і договору (Покрівля)	5	9;28	
8	Розробка та затвердження КП та договору (Благоустрій території ділянки)	5	9;41	
9	Проектна документація підготовлена	6;7;8	46	
10	Фундамент			
11	Занурення паль	5	12;13	
12	Зрубка паль	11	14	
13	Армування ростверку 	11	14	
14	Бетонування ростверку 	12;13	15	
15	Набір міцності	14	16	
16	Фундамент завершено	15	18	
17	Каркас			
18	Кладка із цегли під плиту перекриття	6;16	19	
19	Монтаж плит перекриття 1 поверх 	18	20	
20	Кладка 1-го поверху 	19	21	
21	Монтаж плит перекриття 2 поверх	20	22	
22	Кладка 2-го поверху	21	23	
23	Монтаж плит перекриття між другим поверхом та горищем 	22	24	
24	Кладка парапету та вентиляційних шахт	23	25	
25	Заповнення віконних отворів	24	26	
26	Кладка завершена	25	28; 34	
27	Покрівля			
28	Каркас основної покрівлі	7;26	29	
29	Утеплення покрівлі зі стяжкою	28	30	
30	Металочерепиця основної покрівлі 	29	31	
31	Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка 	30	32	
32	Покрівля завершена	31	46;43	
33	Фасад			
34	Утеплення фасаду та ґрунтовка	26	35	
35	Декоративна штукатурка фасаду 	34	36	
36	Установка молдингу	35	37	
37	Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення 	36	38	
38	Облицювання рваним каменем	37	39	
39	Фасад завершено	38	46	
40	Благоустрій			
41	Планування території 	8	42;43	
42	Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража 	41	44	
43	Озеленення ділянки 	41;32	45	
44	Огородження ділянки	42	45	
45	Благоустрій завершено	43;44	46	
46	Проект завершено	45;39;32;9		

Урок  6. Аналіз критичного шляху. Крайній термін. Базовий план проекту
1.	Виведіть критичний шлях у план-графік проекту. Визначте, які завдання більше впливають на терміни реалізації проекту. 
2.	Встановіть критичними завданнями, які мають резерв менше 3 днів.
3.	Встановіть стовпчик «Загальний часовий резерв». Подумайте про шляхи скорочення термінів проекту.
4.	Збільшите тривалість завдання «Заповнення віконних отворів» на чотири дні і зніміть відхилення з завдання «Утеплення фасаду та ґрунтовка».
5.	Змініть зв'язок між завданням «Озеленення ділянки» на завдання «Металочерепиця основної покрівлі». 
6.	Декомпозуйте завдання «Каркас основної покрівлі» на два завдання: «Встановлення каркасу» - тривалістю 10 днів та «Встановлення фронтону» - тривалістю 15 днів.
7.	Зробіть паралельними завдання «Установка молдингу» та «Декоративна штукатурка фасаду». Завдання «Декоративна штукатурка фасаду» зв’яжіть з віхою «Фасад завершено».
8.	Встановіть стовпчик «Відхилення тривалості» та «Відхилення завершення».
9.	Перемістіть базовий план у «Базовий план 1».
10.	Збережіть базовий план проекту.
11.	Створіть поле «Базовий буфер» типу «тривалість» для введення інформації користувачем.
12.	Створіть поле «Поточний буфер» типу «тривалість» з формулою «[Базовий буфер]-[Відхилення тривалості]»
13.	Створіть поле «Індикатор буфера» типу «число» з формулою «IIf([Базовий буфер]=0;0;[Відхилення тривалості]/[ Базовий буфер])»

Урок 7. Планування витрат проекту
1. Встановіть валюту проекту гривні. Витрати виводитимуть без копійок.
2. Встановіть постійні витрати на завдання «Ресурси проекту» в розмірі 1 500 000 ₴.
3. Обновіть базовий план проекту.
4. Вилучіть постійні витрати.
5. Встановіть постійні витрати на стратегічні завдання згідно з даними таблиці 8.
Таблиця 8
Ім'я завдання	Постійні витрати	
Ресурси проекту	110 000,00 ₴	
Проектні документи	10 000,00 ₴	
Фундамент	   200 000,00 ₴ 	
Каркас	  500 000,00 ₴ 	
Покрівля	   200 000,00 ₴ 	
Фасад	   300 000,00 ₴ 	
Благоустрій	180 000,00 ₴	

6. Обновіть базовий план проекту.
7. Вилучіть постійні витрати.
8. Встановіть постійні витрати завдань проекту згідно з даними таблиці 9.
Таблиця 9
Ім'я завдання	Постійні витрати	
Ресурси проекту	110 000 ₴	
Проектні документи	0 ₴	
Розробка КП та договору на будівництво котеджу	2 000 ₴	
Затвердження КП та підписання договору на будівництво котеджу	2 000 ₴	
Узгодження висоти стелі та додаткових опцій	2 000 ₴	
Розробка та затвердження КП і договору (Покрівля)	2 000 ₴	
Розробка та затвердження КП та договору (Благоустрій території ділянки)	2 000 ₴	
Фундамент	0 ₴	
Занурення паль	101 800 ₴	
Зрубка паль	17 200 ₴	
Армування ростверку 	23 000 ₴	
Бетонування ростверку 	38 000 ₴	
Каркас	0 ₴	
Кладка із цегли під плиту перекриття	16 600 ₴	
Монтаж плит перекриття 1 поверх 	67 500 ₴	
Кладка 1-го поверху 	123 500 ₴	
Монтаж плит перекриття 2 поверх	67 500 ₴	
Кладка 2-го поверху	109 600 ₴	
Монтаж плит перекриття між другим поверхом та горищем 	67 500 ₴	
Кладка парапету та вентиляційних шахт	17 600 ₴	
Заповнення віконних отворів	30 200 ₴	
Покрівля	0 ₴	
Встановлення каркасу	33 000 ₴	
Встановлення фронтону	20 000 ₴	
Утеплення покрівлі зі стяжкою	50 000 ₴	
Металочерепиця основної покрівлі 	56 000 ₴	
Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка 	41 000 ₴	
Фасад	0 ₴	
Утеплення фасаду та ґрунтовка	58 300 ₴	
Декоративна штукатурка фасаду 	40 800 ₴	
Установка молдингу	77 700 ₴	
Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення 	77 700 ₴	
Облицювання рваним каменем	45 500 ₴	
Благоустрій	0 ₴	
Планування території 	39 300 ₴	
Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража 	45 300 ₴	
Озеленення ділянки 	50 000 ₴	
Огородження ділянки	45 400 ₴	
9. Додайте стовпець, який рахуватиме суму у валюті «$ США» за курсом на дату створення.
10. Збережіть базовий план проекту в базовий план 2.
11. Збережіть базовий план проекту
12. Вилучіть постійні витрати.

Урок 8. Бюджетне планування проекту
1. Створіть бюджетний ресурс - Бюджет проекту.
2. Бюджетне обмеження всього проекту – ₴1 500 000.
3. Встановіть бюджетні обмеження за місяцями згідно з даними таблиці 10.
Таблиця 10
Місяць	Бюджет проекту	
Січень	₴226 650	
Лютий	₴424 850	
Березень	₴299 290	
Квітень	₴384 710	
Травень	₴164 500	
4. Створіть витрати ресурси: Підрядники, Співробітники, Матеріали, Механізми, Бригади.
6. Призначте ресурси на завдання «Ресурси проекту».
7. Встановіть витрати для витратних ресурсів. Витрати вказані в таблиці 11.
Таблиця 11
Ім'я ресурсів	Витрати	
Підрядники	200 000 ₴	
Співробітники	40 000 ₴	
Матеріали	580 000 ₴	
Механізми	300 000 ₴	
Бригади	380 000 ₴	
		
8. Розподіліть витрати ресурсів по місяцям.
9. Обновіть базовий план проекту.
10. Встановіть стовпець, який виводитиме різницю між плановими витратами та бюджетом проекту.

Урок 9. Опис та призначення витратних ресурсів проекту
1.	Призначте витратні ресурси на сумарні завдання проекту. Данні по витратам беріть з таблиці 12.
Таблиця 12
Ім'я завдання	Постійні витрати	
Ресурси проекту		
Співробітники	20 000 ₴	
Механізми	100 000 ₴	
Проектні документи		
Співробітники	20 000 ₴	
Фундамент		
Матеріали	50 000 ₴	
Механізми	60 000 ₴	
Бригади	70 000 ₴	
Каркас		
Матеріали	   280 000 ₴ 	
Механізми	   80 000 ₴ 	
Бригади	   140 000 ₴ 	
Покрівля	   	
Підрядники	100 000 ₴	
Матеріали	100 000 ₴	
Фасад		
Матеріали	   70 000 ₴ 	
Механізми	     60 000 ₴ 	
Бригади	   170 000 ₴ 	
Благоустрій		
Підрядники	100 000 ₴	
Матеріали	80 000 ₴	
2. Збережіть базовий план проекту.
3. Призначте затратні ресурси на завдання із зазначенням витрат згідно з даними таблиці 13.
Таблиці 13
WBS	Ім’я ресурсів	Витрати	
	Підрядчики		
КТ.РП.ПК .1	Встановлення каркасу	30 000 ₴	
КТ.РП.ПК .6	Встановлення фронтону	24 000 ₴	
КТ.РП.ПК .2	Утеплення покрівлі зі стяжкою 	25 000 ₴	
КТ.РП.ПК .3	Металочерепиця основної покрівлі 	20 000 ₴	
КТ.РП.ПК .4	Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка 	5 000 ₴	
КТ.РП.БЛ .1	Планування території 	27 000 ₴	
КТ.РП.БЛ .2	Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража 	24 000 ₴	
КТ.РП.БЛ .3	Озеленення ділянки 	26 000 ₴	
КТ.РП.БЛ .4	Огородження ділянки 	23 000 ₴	
	Співробітники		
КТ.РП.ПД .1	Розробка КП та договору на будівництво котеджу 	4 000 ₴	
КТ.РП.ПД .2	Затвердження КП та підписання договору на будівництво котеджу 	4 000 ₴	
КТ.РП.ПД .3	Узгодження висоти стелі та додаткових опцій 	4 000 ₴	
КТ.РП.ПД .4	Розробка та затвердження КП і договору (Покрівля) 	4 000 ₴	
КТ.РП.ПД .5	Розробка та затвердження КП та договору (Благоустрій території ділянки) 	4 000 ₴	
	Матеріали		
КТ.РП.ФД .1	Занурення паль 	39 500 ₴	
КТ.РП.ФД .2	Зрубка паль 	2 600 ₴	
КТ.РП.ФД .3	Армування ростверку 	2 100 ₴	
КТ.РП.ФД .4	Бетонування ростверку 	5 800 ₴	
КТ.РП.КС .1	Кладка із цегли під плиту перекриття 	10 900 ₴	
КТ.РП.КС .2	Монтаж плит перекриття 1 поверх 	43 600 ₴	
КТ.РП.КС .3	Кладка 1-го поверху 	43 600 ₴	
КТ.РП.КС .4	Монтаж плит перекриття 2 поверх 	43 700 ₴	
КТ.РП.КС .5	Кладка 2-го поверху 	39 800 ₴	
КТ.РП.КС .6	Монтаж плит перекриття між другим поверхом та горищем 	41 500 ₴	
КТ.РП.КС .7	Кладка парапету та вентиляційних шахт 	7 600 ₴	
КТ.РП.КС .8	Заповнення віконних отворів 	49 300 ₴	
КТ.РП.ПК .1	Встановлення каркасу	30 000 ₴	
КТ.РП.ПК .6	Встановлення фронтону	28 000 ₴	
КТ.РП.ПК .2	Утеплення покрівлі зі стяжкою 	7 000 ₴	
КТ.РП.ПК .3	Металочерепиця основної покрівлі 	23 000 ₴	
КТ.РП.ПК .4	Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка 	12 000 ₴	
КТ.РП.ФС .1	Утеплення фасаду та ґрунтовка 	11 600 ₴	
КТ.РП.ФС .2	Декоративна штукатурка фасаду	14 100 ₴	
КТ.РП.ФС .3	Установка молдингу 	23 300 ₴	
КТ.РП.ФС .4	Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення	11 600 ₴	
КТ.РП.ФС .5	Облицювання рваним каменем 	9 400 ₴	
КТ.РП.БЛ .1	Планування території 	6 000 ₴	
КТ.РП.БЛ .2	Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража 	24 000 ₴	
КТ.РП.БЛ .3	Озеленення ділянки 	26 000 ₴	
КТ.РП.БЛ .4	Огородження ділянки 	24 000 ₴	
	Механізми		
КТ.РП.ФД .1	Занурення паль 	10 900 ₴	
КТ.РП.ФД .2	Зрубка паль 	9 800 ₴	
КТ.РП.ФД .3	Армування ростверку 	13 700 ₴	
КТ.РП.ФД .4	Бетонування ростверку 	25 600 ₴	
КТ.РП.КС .1	Кладка із цегли під плиту перекриття 	1 000 ₴	
КТ.РП.КС .2	Монтаж плит перекриття 1 поверх 	2 700 ₴	
КТ.РП.КС .3	Кладка 1-го поверху 	24 800 ₴	
КТ.РП.КС .4	Монтаж плит перекриття 2 поверх 	2 700 ₴	
КТ.РП.КС .5	Кладка 2-го поверху 	24 800 ₴	
КТ.РП.КС .6	Монтаж плит перекриття між другим поверхом та горищем 	2 700 ₴	
КТ.РП.КС .7	Кладка парапету та вентиляційних шахт 	1 300 ₴	
КТ.РП.КС .8	Заповнення віконних отворів 	20 000 ₴	
КТ.РП.ФС .1	Утеплення фасаду та ґрунтовка 	8 000 ₴	
КТ.РП.ФС .2	Декоративна штукатурка фасаду	12 000 ₴	
КТ.РП.ФС .3	Установка молдингу 	11 000 ₴	
КТ.РП.ФС .4	Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення	15 000 ₴	
КТ.РП.ФС .5	Облицювання рваним каменем 	14 000 ₴	
	Бригади		
КТ.РП.ФД .1	Занурення паль 	6 600 ₴	
КТ.РП.ФД .2	Зрубка паль 	19 700 ₴	
КТ.РП.ФД .3	Армування ростверку 	10 800 ₴	
КТ.РП.ФД .4	Бетонування ростверку 	32 900 ₴	
КТ.РП.КС .1	Кладка із цегли під плиту перекриття 	27 200 ₴	
КТ.РП.КС .3	Кладка 1-го поверху 	40 400 ₴	
КТ.РП.КС .5	Кладка 2-го поверху 	35 000 ₴	
КТ.РП.КС .7	Кладка парапету та вентиляційних шахт 	23 000 ₴	
КТ.РП.КС .8	Заповнення віконних отворів 	5 400 ₴	
КТ.РП.ФС .1	Утеплення фасаду та ґрунтовка 	14 300 ₴	
КТ.РП.ФС .2	Декоративна штукатурка фасаду	38 400 ₴	
КТ.РП.ФС .3	Установка молдингу 	47 800 ₴	
КТ.РП.ФС .4	Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення	48 000 ₴	
КТ.РП.ФС .5	Облицювання рваним каменем 	21 500 ₴	
4. Вилучіть ресурси що не використовуються на сумарних задач.
5. Обновіть базовий план проекту.

Урок 10. Планування роботи підрядників
1.	Створіть стовпець для вибору лотів проектів - "Лот проекту". Тип виберіть «Текст» з можливостю вибору з параметрів: «Покрівля» та «Благоустрій».
2.	Встановіть значення лоту для завдань «Покрівля» та «Благоустрій».
3.	Створіть два універсальних ресурси що описують роботу підрядних організацій в проекті. 
4.	Замініть витрати на підрядників універсальними ресурсами підрядних організацій. Згідно таблиці 14.
Таблиця 14
WBS	Ім’я ресурсів	Витрати	
 	Підрядник по покрівлі		
КТ.РП.ПК .1	   Встановлення каркасу	28 000 ₴	
КТ.РП.ПК .6	   Встановлення фронтону	23 000 ₴	
КТ.РП.ПК .2	   Утеплення покрівлі зі стяжкою 	24 000 ₴	
КТ.РП.ПК .3	   Металочерепиця основної покрівлі 	20 000 ₴	
КТ.РП.ПК .4	   Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка 	5 000 ₴	
 	Підрядник по благоустрою		
КТ.РП.БЛ .1	   Планування території 	27 000 ₴	
КТ.РП.БЛ .2	   Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража 	24 000 ₴	
КТ.РП.БЛ .3	   Озеленення ділянки 	26 000 ₴	
КТ.РП.БЛ .4	   Огородження ділянки 	23 000 ₴	

5.	Збережіть базовий план.
6.	Створіть стовпець для фіксування договорів проекту – «Договір».
7.	Встановіть для завдань лоту «Покрівля» значення «Договір №1», для завдань лоту «Благоустрій» встановіть значення «Договір №2».
8.	Створіть двох підрядників використовуючи тип матеріальний: «Компанія «Покрівля»» та «Компанія «Благоустрій»».
9.	Замініть універсальних підрядників на реальні компанії..
10.	Призначте витрати як трудовитрати в полі «Робота» на завдання підрядників проекту згідно з даними таблиці 15.
Таблиця 15
WBS	Імена ресурсів	Робота	
 	Компанія «Покрівля»	103 000	
КТ.РП.ПК .1	   Встановлення каркасу	28 000	
КТ.РП.ПК .6	   Встановлення фронтону	23 000	
КТ.РП.ПК .2	   Утеплення покрівлі зі стяжкою 	24 000	
КТ.РП.ПК .3	   Металочерепиця основної покрівлі 	21 000	
КТ.РП.ПК .4	   Обшивка вентиляційних шахт та встановлення козирка 	7 000	
 	Компанія «Благоустрій»	100 000	
КТ.РП.БЛ .1	   Планування території 	28 000	
КТ.РП.БЛ .2	   Влаштування тротуарів, під'їзних шляхів до гаража 	24 500	
КТ.РП.БЛ .3	   Озеленення ділянки 	26 500	
КТ.РП.БЛ .4	   Огородження ділянки 	21 000	
11.	Збережіть базовий план.

Урок 11. Опис та призначення трудових ресурсів проекту
1.	Створіть стовпець відповідальних – стовпець типу Код структури. Створіть перелік відповідальних: менеджер проекту, головний інженер проекту.
2.	Менеджера проекту вкажіть відповідальним на завдання: Розробка та затвердження КП, Узгодження висоти стелі та додаткових опцій, Розробка та затвердження комерційної пропозиції (Покрівля), Розробка та затвердження КП та підписання договору (Благоустрій території ділянки).
3.	На решту завдань призначте відповідальним головного інженера.
4.	Заповніть трудові ресурси у плані-графіці. Перелік ресурсів наведено у таблиці 15.
Таблиця 15
Імена ресурсів	Тип	Група	Звичайна ставка	
Менеджер проекту	Робота	Співробітники	100 ₴/г	
Юрист	Робота	Співробітники	100 ₴/г	
Монолітники	Робота	Бригади	80 ₴/г	
Каменярі	Робота	Бригади	100 ₴/г	
Фасадники	Робота	Бригади	120 ₴/г	
Різноробочі	Робота	Бригади	40 ₴/г	
Своєбійка	Робота	Механізми	80 ₴/г	
Автокран	Робота	Механізми	200 ₴/г	
Компресор	Робота	Механізми	7 000 ₴/міс	
5.	Замініть затратні ресурси: Співробітники та Механізми на трудові ресурси на завдання проекту. Обсяги призначень ресурсів наведено у таблиці 16.
Таблиця 16
Ім’я завдання	Об’єми/Відсотки	Імена ресурсів	
Ресурси проекту	50%	Менеджер проекту	
	100%	Автокран	
Проектні документи	100%	Юрист	
Фундамент			
Занурення паль	40 г	Монолітники	
	8 г	Своєбойка	
Зрубка паль	120 г	Монолітники	
	40 г	Компресор	
Армування ростверку	64 г	Монолітники	
Бетонування ростверку	200 г	Монолітники	
Каркас			
Кладка із цегли під плиту перекриття	192 г	Каменярі	
Кладка 1-го поверху	432 г	Каменярі	
Кладка 2-го поверху	432 г	Каменярі	
Кладка парапету та вентиляційних шахт	192 г	Каменярі	
Заповнення віконних отворів	120 г	Різноробочі	
Фасад			
Утеплення фасаду та ґрунтовка	560 г	Різноробочі	
Декоративна штукатурка фасаду	336 г	Фасадники	
Установка молдингу	720 г	Фасадники	
Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення	336 г	Фасадники	
Облицювання рваним каменем	144 г	Фасадники	

6.	Уточніть роботу юриста на задачі «Проекті документи». Інформація що до об’ємів годин наведено в таблиці 17.
Таблиця 17
Ім’я завдання	Робота	Імена ресурсів	
Розробка КП та договору на будівництво котеджу	32 г	Юрист	
Затвердження КП та підписання договору на будівництво котеджу	24 г	Юрист	
Узгодження висоти стелі та додаткових опцій	32 г	Юрист	
Розробка та затвердження КП і договору (Покрівля)	40 г	Юрист	
Розробка та затвердження КП та договору (Благоустрій території ділянки)	40 г	Юрист	

Урок 12. Вирішення ресурсних конфліктів
1.	Встановіть максимальну кількість виділених ресурсів. Інформацію про об’єми ресурсів в таблиці 18.
Таблиця 18
Ім'я ресурсу	Макс. одиниць	
Менеджер проекту	100%	
Юрист	100%	
Монолітники	500%	
Каменярі	600%	
Фасадники	600%	
Різноробочі	500%	
Своєбойка	100%	
Автокран	100%	
Компресор	100%	

2.	Вирішіть ресурсні конфлікти з урахуванням встановленої кількісті ресурсів. 
3.	Збережіть поточний базовий план проекту.

13. Призначення матеріальних ресурсів проекту. Оптимізація витрат.

1.	Заведіть матеріальні ресурси у план-графік. Перелік матеріальних ресурсів наведено у таблиці 19.
Таблиця 19
Ім'я ресурсу	Тип	Одиниця вимірювання матеріалів	Стандартна ставка	
Палі	Матеріальний	шт.	1000 ₴	
Бетон	Матеріальний	куб.	260 ₴	
Цегла	Матеріальний	пч.	680 ₴	
Плити	Матеріальний	шт.	4 800 ₴	
Вікна	Матеріальний	шт.	3 200 ₴	
Грунтівка	Матеріальний	куб.	650 ₴	
Штукатурка	Матеріальний	куб.	100 ₴	
Молдинг	Матеріальний	пч.	3 000 ₴	
Пінополістирол	Матеріальний	пч.	100 ₴	
Рваний камінь	Матеріальний	куб.	450 ₴	

2.	Призначте матеріальні ресурси замість ресурсу «Матеріали» і «Механізми» на завдання проекту. Обсяги призначень ресурсів наведено у стовпці «Обсяг/Витрати» у таблиці 20.
Таблиця 20
Ім'я завдання	Обсяг/Витрати	Ім'я ресурсу	
Фундамент			
Занурення паль	66 шт.	Палі	
	$1500	Матеріали	
Бетонування ростверку  	32 куб.	Бетон	
	$600	Матеріали	
Каркас			
Кладка із цегли під плиту перекриття	6 пч.	Цегла	
	$1000	Матеріали	
Монтаж плит перекриття 1 поверх  	10 шт.	 ЖБИ	
	$1000	Матеріали	
Кладка 1-го поверху	52 пч.	Цегла	
	$1200	Матеріали	
Монтаж плит перекриття 2 поверх	10 шт.	ЖБИ	
	$1000	Матеріали	
Кладка 2-го поверху	50 пч.	Цегла	
	$1200	Матеріали	
Монтаж плит перекриття між другим поверхом та горищем  	10 шт.	ЖБИ	
	$1000	Матеріали	
Кладка парапету та вентиляційних шахт	4 пч.	Цегла	
	$700	Матеріали	
Заповнення віконних отворів	10 шт.	Вікна	
	$1000	Матеріали	
Фасад			
Утеплення фасаду та ґрунтовка	140 куб.	Грунтівка	
	60 пч.	Пінополістирол	
	₴2 600	Матеріали	
Декоративна штукатурка фасаду	140 куб.	Штукатурка	
	140 куб.	Грунтівка	
	₴4 100	Матеріали	
Установка молдингу	20 пч.	Молдинг	
	₴3 300	Матеріали	
Фарбування фасаду, грунтовка, встановлення вимощення	140 куб.	Грунтівка	
	₴400	Матеріали	
Облицювання рваним каменем	20 куб.	Рваний камінь	
	₴1200	Матеріали	
3.	Заплануйте доставку матеріальних ресурсів на початку реалізації завдань проекту.
4.	Оптимізуйте витрати проектів. Запропонуйте варіанти скорочення витрат проекту.
5.	Збережіть поточний базовий план в базовий план 4.
6.	Збережіть поточний базовий план проекту.
Урок 14. Встановлення факту виконання. 
1.	Встановіть дату звіту про стан проекту на кінець січня (30.01.2022).
2.	Встановіть відсоток виконання завдань проекту, як зазначено в таблиці 21.
Таблиця 21
Фізичний % виконання	% виконання	Ім'я завдання	Фактична тривалість	
100%	100%	Початок	0 днів	
		Проектні документи		
100%	100%	Розробка КП та договору на будівництво котеджу	4 днів	
100%	100%	Затвердження КП та підписання договору на будівництво котеджу	4 днів	
100%	100%	Узгодження висоти стелі та додаткових опцій	5 днів	
		Фундамент 		
100%	100%	Занурення паль	1 день	
100%	100%	Зрубка паль	4 днів	
100%	100%	Армування ростверку	4 днів	
100%	100%	Бетонування ростверку  	4 днів	
100%	100%	Набір міцності	3 днів	
100%	100%	Фундамент завершено	0 днів	
3.	Оновіть проект с переплануванням на дату про стан завершення проекту.
4.	Поновіть план-графік проекту зі зсувом на дату звіту про стан.
5.	Встановіть фактичні обсяги трудових та матеріальних ресурсів та фактичні витрати витратних ресурсів як зазначено в таблиці 22.
Таблиця 22
Ім'я завдання	Фактичні обсяги	
Ресурси проекту		
   Менеджер проекту	85г	
   Автокран	170г	
Проектні документи		
   Розробка КП та договору на будівництво котеджу		
      Юрист	32 г	
   Затвердження КП та підписання договору на будівництво котеджу		
      Юрист	32г	
   Узгодження висоти стелі та додаткових опцій		
      Юрист	40г	
Фундамент		
   Занурення паль		
      Матеріали	₴2 000	
      Механізми	₴10 000	
      Монолітники	40г	
      Своєбойка	8г	
      Палі 	68 шт.	
  Зрубка паль		
      Матеріали	₴3 000	
      Механізми	₴11 000	
      Монолітники	32г	
      Компресор	32г	
   Армування ростверку		
      Матеріали	₴2 000	
      Механізми	₴13 000	
      Монолітники	64г	
   Бетонування ростверку  		
      Матеріали	₴6 000	
      Механізми	₴26 000	
      Монолітники	40г	
      Бетон 	40 куб.	
6.	Переплануйте проект, оптимізуйте використання ресурсів

Урок 15. Планування спринтів проекту
1.	Визначить перелік спринтів с тривалістю 1 місяць на весь проект.
2.	Встановіть дату звітування про стан на «29.02.23».
3.	Сплануйте завдання на другий спринт (лютий місяць).
4.	Налаштуйте дошку для планування спринту.
5.	Визначте виконання завдань спринту за допомогою дошки. Данні візьміть з таблиці 23.
Таблиця 23
% виконання	Ім'я завдання	
 	Проектні документи	
100%	   Розробка та затвердження КП і договору (Покрівля) 	
100%	   Розробка та затвердження КП та договору (Благоустрій території ділянки) 	
100%	   Проектна документація підготовлена 	
 	Каркас 	
100%	   Кладка із цегли під плиту перекриття 	
100%	   Монтаж плит перекриття 1 поверх 	
100%	   Кладка 1-го поверху 	
100%	   Монтаж плит перекриття 2 поверх 	
50%	   Кладка 2-го поверху 	
6.	Встановіть дату звітування про стан на «29.02.23».
7.	Обновіть проект на дату звітування про стан.
Урок 16. Освоєний обсяг. Аналіз реалізації проекту
1.	Встановіть для кожного завдання параметр «Метод обчислення освоєного обсягу» як «Фізичний % виконання».
2.	Проаналізуєте освоєний обсяг проекту.
3.	Додайте у стовпці розрахунку відсотка виконання за витратами «% за витратами» з формулою «IIf([Витрати]=0;0;([Фактичні витрати]/[Витрати])*100)».
4.	Проаналізуйте строки виконання проекту.
5.	Проаналізуйте витрату проекту.
6.	Проаналізуйте трудовитрати проекту.

Урок 17. Звіти щодо проекту
1. Створіть звіт проекту.
2. У звіті виведіть таблицю із завдань проекту:
• поля: базові витрати, бюджетна вартість, витрати, відхилення за вартістю, фактичні витрати, витрати, що залишилися;
• рівень: зведення проекту.
3. Додайте до звіту графік, в якому покажіть, як було заплановано базові витрати, витрати проекту та фактично витрати проекту по тижнях. Рівень завдань – зведення проекту.
4. У звіті виведіть таблицю ресурсів проекту:
• поля: назва, базові трудовитрати, трудовитрати, відхилення з трудовитрат, фактичні трудовитрати;
• угруповання полями: група;
• фільтр: тип ресурсів – трудовий та матеріальний.
5. Додайте у звіт кругову діаграму, в якій виведіть яку частку від загальних витрат займає кожна група ресурсів.

Урок 18. Налаштування MS Project Professional "під себе"
1. Створіть стовпець із графічним індикатором, який показує:
• відхилення менше або рівне 7 днів – зелений колір;
• відхилення менше або одно 14 днів – жовтий колір;
• відхилення більше ніж 14 днів – червоний колір.
2. Створіть свій фільтр, що налаштовується, в якому виведіть перелік нереалізованих критичних завдань, а також завдань з витратами більше 1000 $.
3. Створіть угруповання з умовами: 1 рівень – відповідальний, 2 рівень – договору проекту.
4. Створіть свою таблицю, в якій виведіть: «ІД», «Ім’я завдання», «Тривалість», «Витрати», «Відхилення по закінченню», «Відхилення за витратами».
5. Створіть своє представлення з Вашим угрупуванням, фільтром та таблицею.
6. Налаштуйте друк Вашої вистави:
• Приховайте легенду плану-графіка;
• Додати місце для підпису керівника компанії;
• Виведіть на друк лише стовпці " Ім’я завдання", "Тривалість", "Витрати";
• Підготуйте план-графік для друку на одному аркуші.
7. Експортуйте проект у формат PDF.

Урок 19. Портфель проектів
1.	Створіть шаблон проекту на основі створеного проекту.
2.	Створіть п’ять проектів зі стартом між проектами в три місяці.
3.	Створіть портфель проектів з п’яти проектів.
4.	Зв’яжіть задачі різних проектів портфеля.

Урок 20. Корпоративні ресурси портфелю
1.	Сплануйте бюджет портфеля проекту виходячи с витрат проектів.
2.	Оптимізуйте загальні ресурси по проектами портфелю.
3.	Створіть загальний корпоративний пул ресурсів.
4.	Додайте корпоративний пул ресурсів до п’яти проектів.
5.	Оптимізуйте використання корпоративного пулу ресурсів.